TÖÖVÕTULEPINGU NR 3-6/23/586-1 MUUDATUS NR 1

Tallinn							21.02.2024 nr 3-6/24/586-2
								                               
Tellija:
Nimi:				Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Registrikood: 			70009764
Aadress, postiindeks:		Järve 34a, 11314 Tallinn
Kontakttelefon, e-post:		tel 717 0400, e-post info@rkik.ee

Tellija esindaja:	peadirektor Magnus-Valdemar Saar, kes tegutseb põhimääruse alusel (edaspidi nimetatud Tellija)

Tellija kontaktisik:	Lauri Naaber, ehituse projektijuht-eelarvestaja, tel +372 5309 9775, e-post 	Lauri.naaber@rkik.ee
	
ja

Töövõtja:
Ettevõtja nimi:			Nordecon AS
Registrikood: 			10099962
Aadress, postiindeks: 		Toompuiestee 35, 10149 Tallinn 
Kontakttelefon, e-post: 	tel +372 615 440, e-post nordecon@nordecon.com
Töövõtja esindaja:	juhatuse liige Tarmo Pohlak, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi nimetatud Töövõtja)

Töövõtja kontaktisiku nimi 
ja kontaktandmed:	Priit Murmann, tel +372 5553 7833, e-post Priit.Murmann@nordecon.com ja Henry Kõomägi, tel +372 5346 0407, e-post Henry.Koomagi@nordecon.com

edaspidi nimetatud ka eraldi Pool või koos Pooled, leppisid kokku 18.08.2023 sõlmitud töövõtulepingu nr 3-6/23/586-1 (edaspidi leping) muudatuses lähtudes riigihangete seaduse § 123 lõike 1 punktist 2, lepingu punktist 8.6.2. ja Töövõtja 15.02.2024 taotlusest lepingulise vahetähtaja muutmiseks seoses vajadusega täpsustada projekteerimise lahenduste lähteülesandeid, alljärgnevas:

1.	Käesoleva muudatusega muudetakse lepingu punkti 4.4.1. poolte kokkuleppel ja sõnastatakse järgmiselt:

„4.4.1. Projekteerimistööd hiljemalt 30.06.2024.“

2.	Käesolev muudatus ei mõjuta lepingu lõpptähtaega ja maksumust.

3.	Lepingu muudatus jõustub muudatuse allkirjastamisest poolte poolt.

4.	Lisa

4.1.	Lisa: Projekteerimistööde tähtaja pikendamise taotlus.

Tellija esindaja:						Töövõtja esindaja: 

(allkirjastatud digitaalselt)				(allkirjastatud digitaalselt)

Magnus-Valdemar Saar					Tarmo Pohlak
peadirektor						juhatuse liige