KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS

Lepingu pool (toetuse saaja)	Sihtasutus Eesti Meremuuseum	
Lepingu sõlmimise kuupäev	11.02.2025	
Lepingu nr	7-1/30-1	

Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus	
Sihtasutusele Eesti Meremuuseum eraldati 2025. aastaks sihtotstarbelise remondifondi toetuse hulgas Lennusadama C-kai remontöödeks toetus summas 20 000 eurot. C-kai avariitööd teostati aprillis 2025 ja toetusest kasutati 18 700 eurot. 
Palume toetuse jäägi 1300 euro kasutamise perioodi pikendada kuni 01.04.2026.
2025. aasta detsembri lõpu tormi järgselt on taas tekkinud kaisse auk ning vajalik on teostada täiendavaid avariitööd 2026. aasta esimeses pooles.	

Avalduse esitaja nimi ja ametikoht	Allkiri / võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna 	Kuupäev	
Urmas Dresen, juhatuse liige

	allkirjastatud digitaalselt	13.01.2026