Lisa 8

Lepingu nr 2-2/20/426-1 muudatus nr 4

Tallinn	02.04.2024 nr 2-2/24/342-1

Tellija	Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, registrikoodiga 70009764, mida esindab volituse alusel hangete osakonna juhataja Ivar Janson

ja

Töövõtja	ConArte OÜ, registrikoodiga 11732539, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Tiina Vilberg.

Arvestades,	et Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja ConArte OÜ vahel on 05.06.2020 sõlmitud leping nr 2-2/20/426-1, mille järgi ConArte OÜ kohustus teostama Tallinna Linnavalitsuse 20.05.2015 korraldusega nr 774-k „Filtri tee ja Masina tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas“ algatatud Filtri tee ja Masina tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu ning Filtri tee ja Masina tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu ja Filtri tee 10 kinnistu, Filtri tee 12 kinnistu ja Filtri tee 12a kinnistu detailplaneeringu liikluskoormuse analüüsi ja tööd Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele üle andma.

Arvestades,	et ConArte OÜ alltöövõtja, osaühing Stratum, on koostanud liikluskoormuse analüüsi, mis on ConArte OÜ poolt Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele üle antud 28.08.2020 sõlmitud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga nr 1.

Arvestades,	et ConArte OÜ on koostanud ja kooskõlastanud kõikide asjakohaste riigiasutuste, Tallinna linna allasutuste ja tehnovõrkude valdajatega Filtri tee ja Masina tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu, mis on ConArte OÜ poolt Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele üle antud 29.08.2023 sõlmitud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga nr 2.

Arvestades,	et ConArteOÜ põhjendas 22.03.2024 kirjas nr 019, et  kuigi detailplaneering oli vastuvõtmise valmis, esitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet 27.02.2023 kirjas nr 3-2/497 – 1 nõude kooskõlastusete värskendamiseks, mis pikendas oluliselt menetluse aega. Värskendatud kooskõlastustega detailplaneering edastati planeerija poolt uuesti Tallinna planeeringute registrisse 26.06.2023. Peale kõikide kooskõlastustega detailplaneeringu esitamist Tallinna linnale pidi detailplaneeringust huvitatud isik ehk Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus leppima kokku Tallinna linnaga  detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse, tänavavalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni ehitamise tingimused.  Vastav leping on sõlmitud osapoolte vahel sõlmitud 28.02.2024 (haldusleping nr TKA12). Käesoleval ajal koostab ja kooskõlastab Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringu vastuvõtmise otsuse eelnõud. Kuna tegemist on  Tallinna linna üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, siis  otsustab detailplaneeringu vastuvõtmise ja kehtestamise üle Tallinna Linnavolikogu.

                            ConArte OÜ on taotlenud 22.03.2024 kirjaga töö tähtaja pikendamist.

Arvestades, 	et riigihangete seaduse § 123 lõige 1 punkt 4 mõistes põhjustasid muudatuse hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud ning hankelepingu üldist olemust ei muudeta.

Pooled leppisid 05.06.2020 lepingu nr 2-2/20/426-1 punkti 8.1 ning ConArte OÜ 22.03.2024 kirjaga esitatud ettepaneku ja lepingu punkti 4.2 alusel, et muudavad 05.06.2020 lepingut nr 2-2/20/426-1 järgmiselt:

1.	Pooled lepivad kokku uues lepingu eseme üleandmise tähtajas, milleks on 06.04.2025. 

2.	Kokkuleppe punkti 1 järgi lepivad pooled kokku, et muudavad 05.06.2020 lepingu nr 2-2/20/426-1 punkti 4.1 järgmiselt:

„4.1. Töövõtja kohustub teostatud töö tellijale kooskõlas lepingu punktiga 5 üle andma hiljemalt 06.04.2025.“

3.	Kokkuleppe punkti 1 järgi lepivad pooled kokku, et muudavad 05.06.2020 lepingu nr 2-2/20/426-1 lisas 1 toodud tööde kava, ajagraafikut ja maksumuse tabelit järgmiselt:

Nr	Teenuse nimetus	Maksumus eurodes ilma käibemaksuta	Maksumus eurodes käibemaksuga	Tähtaeg
(aega loetakse alates lepingu mõlemapoolset allkirjastamist)	
…	…	…	…	…	
3	Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine3	1800	2196	30.05.2024	
4	Detailplaneeringu kehtestamine4	200	244	30.04.2025	

4.	Punktis 2 toodud muudatus ei too tellijale rahalisi lisakulusid. 

5.	Kokkulepe jõustub, kui mõlemad pooled on selle alla kirjutanud. Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt. 

6.	Kokkulepe on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja ConArte OÜ vahel 05.06.2020 sõlmitud lepingu 2-2/20/426-1 lahutamatu lisa.

7.	Lisa

7.1.	Lisa: ConArte OÜ 22.03.2024 kiri.

Tellija:
	Töövõtja:	
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus	ConArte OÜ	
Järve 34a	Paevälja puiestee 5	
11314 Tallinn
tel 717 0400	13619 Tallinn
tel 665 1444	
e-post info@rkik.ee	e-post conarte@conarte.ee 	

(allkirjastatud digitaalselt)					(allkirjastatud digitaalselt)

Ivar Janson						Tiina Vilberg
hangete osakonna juhataja				juhatuse liige