TÖÖVÕTULEPINGU NR 3-6/24/351-1 MUUDATUS

Tallinn	19.06.2024 nr 3-6/24/351-2

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, registrikood 70009764, aadress Järve 34a, 11314 Tallinn, mida esindab direktori 07.12.2020 käskkirja nr 77 ja 28.02.2024 käskkirja nr 26 alusel hankebüroo juht Marek Järlak hangete osakonna juhataja ülesannetes (edaspidi nimetatud tellija), ühelt poolt

ja

MIVO EHITUS OÜ, registrikood 10990831, aadress Tallinna mnt 3b, 79512 Rapla, mida esindab põhikirja alusel Avo Allikmäe (edaspidi nimetatud töövõtja), teiselt poolt (edaspidi nimetatud ka eraldi pool ja koos pooled), leppisid kokku 05.04.2024 sõlmitud töövõtulepingu nr 3-6/24/351-1 (edaspidi töövõtuleping) muudatuses lähtudes riigihangete seaduse § 123 lõike 1 punktist 7 alljärgnevas:

1.	Muudetakse lepingu punkti 5.1. ning sõnastatakse järgmiselt:

„5.1. Töövõtja kohustub töö lõpetama hiljemalt 15.08.2024. Tellija annab pinnad üle töövõtjale pärast tööde teostamiseks vajaliku projektdokumentatsiooni kooskõlastamist.“

2.	Muudatus ei mõjuta lepingu maksumust.

3.	Lepingu muudatus jõustub muudatuse allkirjastamisest poolte poolt.

4.	Poolte rekvisiidid:

Tellija:
	Töövõtja:	
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Registrikood 70009764
Järve 34a
11314 Tallinn

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Järlak
hangete osakonna juhataja ülesannetes	MIVO EHITUS OÜ
Registrikood 10990831
Tallinna mnt 3b
79512 Rapla

(allkirjastatud digitaalselt)

Avo Allikmäe
juhatuse liige