Anna Renžina		
Päästeameti Põhja Päästekeskus		
Erika 3		
10416 Tallinn	09.04.2024 nr 1-9/32 - 1	
anna.renzina@rescue.ee		

Ettekirjutuse 04.03.2019 nr 7.2-6.2/535 täitmine.		

Paikvaatluse haldusmenetluses protokollis nr 7.2-6.2/535  tuvastatud ettekirjutuse täitmine:

2. Ette näha lasteaia trepikodades kergesti avatav aken tulekahju korral suitsu väljalaskmiseks. Täitmise tähtaeg 01.01.2024.

2023 aasta eelarve kulus lasteaia c-korpuse fuajee akende vahetuseks. Aknad olid väga halvas seisus, puidust raamid väljastpoolt kõdunenud, klaasid ohtlikult nende vahel. Koos akende vahetusega sai vahetatud radiaatorid, paigaldatud lahtikäiv uks väljapääsuks ja tuulutamiseks.

Tähtajaks 01.04.2024 on ettekirjutus täitmata. Võimalusel palume ajapikendust 2025 a. 01.juulini.
Seni on meil kasutada suitsu eemaldamiseks koridorides olevad lahtikäivad aknad 4 tk. ja fuajees uks terrassile. 

Pilt 1.  A-ja B koridorides asuvad avatavad aknad, kummaski 2 tk.

Pilt 2.	C-korpuse fuajees vahetatud ohtlikud aknad ja uks terrassile.

	
	
Lugupidamisega	
	
(allkirjastatud digitaalselt)	
Annika Kongi	
direktor	

Aili Reiss
621 8843 aili.reiss@kivila.edu.ee