TÖÖVÕTULEPINGU nr 3-6/24/116-1 MUUDATUS NR 2

Tallinn							21.08.2024 nr 3-6/24/116-2
							                               
Tellija:
Nimi:				Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Registrikood: 			70009764
Aadress, postiindeks:		Järve tn 34a, 11314 Tallinn
Kontakttelefon, e-post:		tel + 372 717 0400, e-post info@rkik.ee

Tellija esindaja:	peadirektor Magnus-Valdemar Saar, kes tegutseb põhimääruse alusel (edaspidi nimetatud Tellija)

Tellija kontaktisik:	Marko Unt, taristuosakonna projektijuht, 
	tel +372 5194 4682, e-post marko.unt@rkik.ee 

ja
Töövõtja:
Ühispakkujad Embach Ehitus OÜ (12802319) ja OÜ NOBE (10647027), keda esindab ühispakkujate volituse alusel:

Ettevõtja nimi:			Embach Ehitus OÜ 
Registrikood: 			12802319
Aadress, postiindeks: 		Turu tn 34, Tartu linn, 51014 Tartu maakond 
Kontakttelefon, e-post: 	tel +372 515 1583, e-post embach@embach.ee
Töövõtja esindaja:	Andres Salusaar, juhatuse liige, kes tegutseb põhikirja/volituse alusel (edaspidi nimetatud Töövõtja)

Töövõtja kontaktisiku nimi 
ja kontaktandmed:	Ahti Kala, peaprojektijuht, tel +372 5344 8623, e-post ahti.kala@embach.ee 

edaspidi nimetatud ka eraldi Pool või koos Pooled

leppisid kokku 15.02.2024 sõlmitud töövõtulepingu nr 3-6/24/116-1 (edaspidi leping) muudatuse seoses projekteerimisprotsessi käigus tellija esitatud muudatusettepanekutest tingitud projekteerimisperioodi pikenemisest ning lähtudes riigihangete seaduse § 123 lõike 1 punktidest 2 ja 7 ning lepingu punktist 8.6.5:

1.	Käesoleva muudatusega muudetakse lepingu punkti 4.4.1. ning sõnastatakse see järgmiselt: 

„ 4.1.1. Tööprojekt 8 (kaheksa) kuud ehitustööde algusest;“

2.	Käesoleva muudatusega fikseeritakse kirjalikult vastavalt lepingu punktile 19.2 Tellija kontaktisiku muudatus.  Uus Tellija kontaktisik on Marko Unt.

Muud lepingu tingimused jäävad muutmata ja kehtivad endisel kujul. Lepingu muudatus nr 2 jõustub mõlema poole allkirjastamisest.

Lisa: Töövõtja taotlus lepingu vahetähtaja pikendamiseks

Tellija esindaja:						Töövõtja esindaja: 

(allkirjastatud digitaalselt)				(allkirjastatud digitaalselt)

Magnus-Valdemar Saar					Andres Salusaar
peadirektor						juhatuse liige