TÖÖVÕTULEPINGU NR 2-2/22/642-1 MUUDATUS NR 1

Tallinn							23.02.2024 nr 2-2/24/642-2
								                               
Tellija:
Nimi:				Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Registrikood: 			70009764
Aadress, postiindeks:		Järve 34a, 11314 Tallinn
Kontakttelefon, e-post:		tel 717 0400, e-post info@rkik.ee

Tellija esindaja:	peadirektor Magnus-Valdemar Saar, kes tegutseb põhimääruse alusel (edaspidi nimetatud Tellija)

Tellija kontaktisik: 	Aarne Keldrima, tel +372 5197 5282, e-post aarne.keldrima@rkik.ee
	
ja

Töövõtja:
Ettevõtja nimi:			REVIN GRUPP OÜ
Registrikood: 			11896241
Aadress, postiindeks: 		Kastani pst 10, Rakvere linn, 44307 Lääne-Viru maakond 
Kontakttelefon, e-post: 	tel +372 5569 3619, e-post info@revingrupp.eu
Töövõtja esindaja:	juhatuse liige Kristjan Madisson, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi nimetatud Töövõtja)

Töövõtja kontaktisiku nimi 
ja kontaktandmed:	Mikk Jalak, e-post mikk@revingrupp.eu, tel +372 504 4590

edaspidi nimetatud ka eraldi Pool või koos Pooled leppisid kokku 26.09.2022 sõlmitud töövõtulepingu nr 2-2/22/642-1 (edaspidi leping) muudatuses lähtudes riigihangete seaduse § 123 lõike 1 punktidest 1 ja 2, lepingu punktist 8 ja Töövõtja pakkumusest lisatöödele alljärgnevas:

1.	Seoses täiendavate tööde tellimise vajadusega (muudatuse lisa 1) muudetakse lepingu punkti 5.1. ning sõnastatakse järgmiselt:

„5.1. Lepingu tasu on 3 730 519,60 (kolm miljonit seitsesada kolmkümmend tuhat viissada üheksateist eurot ja kuuskümmend senti) eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras.“ 

2.	Pooled lepivad kokku, et Tellija kohustub Töövõtjale tasuma ettenägematute lisatööde (muudatuse lisa 2) eest 32 081,46 (kolmkümmend kaks tuhat kaheksakümmend üks eurot ja nelikümmend kuus senti) eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras. Tasu kaetakse Tellija reservi arvelt, mis on nimetatud lepingu punktis 5.2. Reservi jääk on peale eelnimetatud reservi osa kasutamist 115 537,30 (ükssada viisteist tuhat viissada kolmkümmend seitse eurot ja kolmkümmend senti) eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras.

3.	Seoses punktiga 1 ja 2 muudetakse lepingu punkti 4.4. ja sõnastatakse järgmiselt:

„ 4.4 Lepingu eseme üleandmise lõpp-tähtaeg on 01.07.2024.“

4.	Muud lepingu tingimused jäävad muutmata ja kehtivad endisel kujul. Lepingu muudatus nr 1 jõustub mõlema poole allkirjastamisest.

5.	Lisad

5.1.	Lisa 1. Täiendavate tööde hinnapakkumus;
5.2.	Lisa 2. Lisatööde hinnapakkumus.

Tellija esindaja:						Töövõtja esindaja: 

(allkirjastatud digitaalselt)				(allkirjastatud digitaalselt)

Magnus-Valdemar Saar					Kristjan Madisson
peadirektor						juhatuse liige