TÖÖVÕTULEPINGU NR 3-6/23/570 MUUDATUS NR 1

Tallinn							31.01.2024 nr 3-6/24/570-2
							                               
Tellija:
Nimi:				Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Registrikood: 			70009764
Aadress, postiindeks:		Järve 34a, 11314 Tallinn
Kontakttelefon, e-post:		tel 717 0400, e-post info@rkik.ee

Tellija esindaja:	peadirektor Magnus-Valdemar Saar

Tellija kontaktisik:	Argo Kass, taristuosakonna projektijuht, 
	tel +372 5866 4973, e-post argo.kass@rkik.ee 
	
ja
Töövõtja:
ühispakkujad Embach Ehitus OÜ (12802319), aadress Turu tn 34, 51014 Tartu ja Nordecon AS (10099962), aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn, keda esindab ühispakkujate volituse alusel:

Ettevõtja nimi:			Embach Ehitus OÜ
Registrikood: 			12802319
Aadress, postiindeks: 		Turu tn 34, 51014 Tartu
Kontakttelefon, e-post: 	tel +372 515 1583, e-post embach@embach.ee 
Töövõtja esindaja:	juhatuse liige Andres Salusaar, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi nimetatud Töövõtja)

Töövõtja kontaktisiku nimi 
ja kontaktandmed:	Margo Rosin, projektijuht, tel +372 510 2668, e-post margo.rosin@embach.ee

edaspidi nimetatud ka eraldi Pool või koos Pooled

sõlmisid heas usus alljärgneva lepingu muudatuse:

Vastavalt Töövõtja taotlusele (lisa 1) ning 11.08.2023 tellija ja töövõtja vahel sõlmitud töövõtulepingu nr 3-6/23/570-1 (leping) punktide 4.5., 8.2., 8.3., 8.4 ning riigihangete seaduse (RHS) § 123 lg 1 punkti 2 alusel otsustati muuta lepingut alljärgnevalt:

1.	Seoses 2024. aasta jaanuarikuu esimesel nädalal esinenud ekstreemselt külmade ilmastikuoludega ei olnud võimalik perioodil 02.01–08.01.2024 ehitustehnoloogiliselt ajakavas olnud ehitustöid teostada ning seetõttu pikendatakse lepingu punktis 4.4. lepingu eseme üleandmise tähtaega. Lepingu punkt 4.4 sõnastatakse järgmiselt:

4.4.	„Lepingu eseme üleandmise lõpp-tähtaeg on hiljemalt 06.09.2024, kusjuures kinni tuleb pidada järgmistest vahetähtaegadest:

4.4.1.	Projekteerimine (tööprojektide koostamine) kuni 3 (kolm) kuud Lepingu jõustumisest;
4.4.2.	Õppehoone karp ilmastikukindel hiljemalt 8 (kaheksa) kuud Lepingu jõustumisest;
4.4.3.	Administratiivhoone karp valmis hiljemalt 8 (kaheksa) kuud Lepingu jõustumisest;
4.4.4.	Näidisruumid valmis hiljemalt 9 (üheksa) kuud Lepingu jõustumisest;
4.4.5.	Välistrassid valmis hiljemalt 10 (kümme) kuud Lepingu jõustumisest.“

2.	Muud lepingu tingimused jäävad muutmata ja kehtivad endisel kujul. Lepingu muudatus nr 1 jõustub mõlema poole allkirjastamisest.

3.	Lisad

3.1.	Lisa  1. Töövõtja taotlus.

(allkirjastatud digitaalselt)				(allkirjastatud digitaalselt)

Magnus-Valdemar Saar					Andres Salusaar
peadirektor						juhatuse liige