TÖÖVÕTULEPINGU NR 3-6/23/838-1 MUUDATUS NR 1

Tallinn							13.03.2024 nr 3-6/24/838-2
						                               
Tellija:
Nimi:				Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Registrikood: 			70009764
Aadress, postiindeks:		Järve 34a, 11314 Tallinn
Kontakttelefon, e-post:		tel 717 0400, e-post info@rkik.ee
Tellija esindaja:	peadirektor Magnus-Valdemar Saar, kes tegutseb põhimääruse alusel (edaspidi nimetatud Tellija)

ja

Töövõtja:
Ettevõtja nimi:			Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti
Registrikood: 			12203636
Aadress, postiindeks: 		Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn 
Kontakttelefon, e-post: 	tel +372 680 5105, e-post merko@merko.ee
Töövõtja esindaja:	juhatuse liige Veljo Viitmann, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi nimetatud Töövõtja)

edaspidi nimetatud ka eraldi Pool või koos Pooled, leppisid kokku 31.10.2023 sõlmitud töövõtulepingu nr 3-6/23/838 (edaspidi leping) muudatuses lähtudes riigihangete seaduse § 123 lõike 1 punktidest 2 ja 7, lepingu punktist 8 ning Töövõtja 27.02.2024 teavitusest kontaktisikute vahetuse ning Töövõtja 27.02.2024 taotlusest vahetähtaegade muutmise kohta:

1.	Teha muudatused lepingu kontaktisikute osas järgmiselt:

1.1.	Muuta Tellija kontaktisikut ning nimetada Tellija kontaktisikuks Argo Kass, tel +372 5866 4973 , e-post argo.kass@rkik.ee.
1.2.	Muuta Töövõtja kontaktisikut ning nimetada Töövõtja kontaktisikuks Martin Sigus, tel +372 5680 5476, e-post martin.sigus@merko.ee.

2.	Muuta lepingu punkte 4.5.1 ja 4.5.2. ning sõnastada järgmiselt:

„4.5.1. Kasarmute projekteerimine 6 (kuud) kuud alates lepingu jõustumisest;

4.5.2. Tehnovõrkude projekteerimine 8 (kaheksa) kuud alates lepingu jõustumisest;“

3.	Täiendada lepingut punktiga 19.11. ning sõnastada järgmiselt:

19.11.	Kontaktisiku või muude andmete muutumisest teatab pool ühepoolse kirjaliku avaldusega teisele poolele viivitamata, hiljemalt 5 päeva jooksul muudatuse toimumisest arvates ning see fikseeritakse järgmise koosoleku protokollis. Nimetatud teadet ei loeta lepingu muudatuseks. 

4.	Käesolev muudatus ei mõjuta lepingu lõpptähtaega ja maksumust.

5.	Muudatus jõustub muudatuse allkirjastamisest poolte poolt.

6.	Lisad

6.1.	Lisa 1. Töövõtja taotlus kontaktisiku vahetuse kohta;
6.2.	Lisa 2. Töövõtja taotlus vahetähtaegade pikendamise kohta.

Tellija esindaja:						Töövõtja esindaja: 

(allkirjastatud digitaalselt)				(allkirjastatud digitaalselt)

Magnus-Valdemar Saar					Veljo Viitmann
peadirektor						juhatuse liige