KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS

Lepingu pool (toetuse saaja)	Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum	
Lepingu sõlmimise kuupäev	21.01.2025	
Lepingu nr	7-1/20-1	

Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus	
Sihtasutusele Eesti Ajaloomuuseum eraldati 2025. aastaks sihtotstarbelise remondifondi toetuse hulgas hoidlahoone (Pirita tee 74/76, Tallinn) elektri- ja nõrkvoolupaigaldise uuendamiseks 87 246 eurot. 
Kuivõrd kaks esimest projekteerimise hanget ebaõnnestusid, siis on lükkunud tööde lõpetamine 2026. aasta esimesse kvartalisse. Toetusest oli 31.12.2025 seisuga kasutamata 69 100,26 €.
Palume toetuse jäägi kasutamise perioodi pikendada kuni 30.04.2026.	

Avalduse esitaja nimi ja ametikoht	Allkiri / võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna 	Kuupäev	
Jaanus Rohumaa, juhatuse liige

	allkirjastatud digitaalselt	26.01.2026