HANKELEPINGU 2-2/24/431-1 MUUDATUS 1
	
Tallinn	30.07.2024 nr 2-2/24/431-2   	

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, registrikood 70009764, Järve 34a, 11314 Tallinn, mida esindab direktori 07.12.2020 käskkirja nr 77 alusel Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hangete osakonna juhataja Ivar Janson (edaspidi nimetatud tellija), ühelt poolt ja

ja 

Osaühing Reaalprojekt, registrikood 10765904, aadress Tallinna tn 45, Viljandi 71008, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Mikk Reier (edaspidi nimetatud täitja), teiselt poolt, edaspidi tellija ja täitja üheskoos kui pool või pooled, sõlmivad pooled hankelepingu nr 2-2/24/431-1 (edaspidi leping) muudatuse riigihangete seaduse § 123 lõike 1 punkti 3 ja lepingu punkti 11.7 alusel alljärgnevas:

1.	Käesoleva muudatusega tellitakse täiendavaid mõõdistamistöid. Arvestades asjaoludega, et uue hanke läbiviimine põhjustaks hankijale olulist ebamugavust ning lisandunud mõõdistamistööde tellimine samalt ettevõttelt on majanduslikult otstarbekas siis tellitakse lisatöö samalt ettevõttelt.
2.	Lisatöödest tulenevalt suureneb hankelepingu punktis 4.1 nimetatud maksumus summas 2660,00 eurot, millele lisandub käibemaks seaduses sätestatud korras. 
Peale lepingu muudatuse jõustumist on hankelepingu maksumus kokku 11 540,00 eurot, millele lisandub käibemaks seaduses sätestatud korras.
3.	Tulenevalt asjaolust, et Maa-amet on käivitamas maatoimingute platvormi rakenduse Minu Kataster e-keskkonda ja see takistab märkimisväärselt katastritööde läbiviimist pikendatakse lepingu punktis 11.1 märgitud tööde teostamise tähtaega, milleks on peale muudatuse jõustumist 31.12.2024.
4.	Muudatus jõustub alates allkirjastamisest mõlema poole poolt ja kehtib kuni võlasuhte lõppemiseni.
5.	Lisa

5.1.	Lisa 1. Lisatööde pakkumine

6.	Poolte rekvisiidid

Tellija:

(allkirjastatud digitaalselt) 

Ivar Janson				
hangete osakonna juhataja	Täitja:

(allkirjastatud digitaalselt)

Mikk Reier 
juhatuse liige