KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS

Lepingu pool (toetuse saaja)	Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid	
Lepingu sõlmimise kuupäev	21.02.2025	
Lepingu nr	7-1/69-1	

Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus	
Sihtasutusele Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid eraldati 2025. aastaks sihtotstarbelise remondifondi toetus 138 911 eurot järgmiste remonttööde teostamiseks:
1)	Iloni Imedemaa katuse läbijooksude likvideerimine ja katuse katendi remont;
2)	Haapsalu Raudteejaama remont (hoone renoveerimiste ettevalmistamine ja avariiremonttööd);
3)	Haapsalu linnuse müüride välisperimeetril ohtlike lõikude avarii-konserveerimistööd;
4)	Iloni Imedemaa ATS-i puuduste kõrvaldamine;
5)	Ants Laikmaa Majamuuseumi korstnapeade uuendamine;
6)	Haapsalu Toomkiriku avariilise elektrisüsteemi remont;
7)	Haapsalu Toomkirik toomkiriku kontraforsi avariilise varingu likvideerimine.

Punktides 1 kuni 6 nimetatud remonttööd teostati 2025. aastal. Punktis 7 nimetatud remonttöö teostamine lükkus edasi, sest kontraforsi  kahjustatud müüriosa ei olnud võimalik kinni laduda hilissügisesel sademeterohkel öökülmadega perioodil (toetuse eraldamise otsus jäi oktoobrisse 2025). Tööd on plaanis teostada tähtajaga kuni 30.06.2026 (II kv jooksul). 

Remondifondi toetusest oli 31.12.2025 seisuga kasutamata 20 000 eurot.

Palume toetuse jäägi kasutamise perioodi pikendada kuni 30.06.2026.	

Avalduse esitaja nimi ja ametikoht	Allkiri / võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna 	Kuupäev	
Anton Pärn, juhatuse liige

	allkirjastatud digitaalselt	27.01.2026