KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS

Lepingu pool (toetuse saaja)	Rahvusooper Estonia	
Lepingu sõlmimise kuupäev	11.01.2024	
Lepingu nr	7-1/11	

Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus	
Palume pikendada perioodiks 01.01.-31.12.2024 eraldatud sihtotstarbelise remondifondi toetuse kasutamise perioodi kuni 31.12.2025.

Rahvusooperile Estonia eraldati 2024. aastaks remondifondi toetus summas 175 000 eurot järgmiste tööde teostamiseks:
1)	ATS süsteemi lõpuni ehitamine (91 960 eurot);
2)	toolide remont saalis (72 713 eurot);
3)	talveaia katuseakende remont (10 327 eurot).

Punktides 2 ja 3 nimetatud remonttööd on teostatud ja toetus vastavas mahus 31.12.2024 seisuga kasutatud.

Punktis 1 nimetatud remonttööd teostati 2024. aastal summas 74 205,52 eurot. Kasutamata toetuse jääk 31.12.2024 seisuga oli 17 754,48 eurot, mille palume üle kanda 2025. aastasse, et jätkata ATS süsteemi ehitust hoone Eesti Kontserdi pooles.

Avalduse esitaja nimi ja ametikoht	Allkiri / võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna 	Kuupäev	
Ott Maaten, peadirektor	allkirjastatud digitaalselt	29.05.2025