KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS

Lepingu pool (toetuse saaja)
	Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid	
Lepingu sõlmimise kuupäev	21.02.2025	
Lepingu nr	7-1/69-1	

Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus	
Sihtasutusele Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid eraldati 2025. aastal sihtotstarbeline remondifondi toetus 20 000 eurot Haapsalu Toomkirik toomkiriku kontraforsi avariilise varingu likvideerimiseks, mille kasutamise perioodi pikendati lepingu lisaga 5 kuni 30.06.2026. 

Palume toetuse jäägi kasutamise perioodi pikendada kuni 30.11.2026.
Tööde lükkumine sügisesse oli seotud Toomkiriku kliima tõhususe projekti ehitustööde hanke auditeerimisega, mida RTK teostas 6 kuud, Selle käigus ei toimunud tagasimakseid, samas kui ehitustööd objektil toimusid ning asutus pidi tegema lepingus ettenähtud makseid. Kujunenud olukorras ei saanud sihtasutus algatada uut tööd. Pärast hanke auditeerimist taastati tagasimaksed ning selleks ajaks olid Toomkiriku tööd lõpusirgel.
Toomkiriku tööde lõpetamise akt allkirjastati 16.06.2026.
Käesoleval ajal on linnuses muuseumikülastuste ja vabaõhu ürituste kõrghooaeg ning tööd saab algatada augustis-septembris.
Vajalikud ettevalmistused on tehtud: tööde tegevuskava (arhitekt Elo Sova) on koostatud ja Muinsuskaitseametis kooskõlastatud (vt lisa).
Palume pikendada tööde lõpptähtaega seisuga 30.10.2026.

Avalduse esitaja nimi ja ametikoht	Allkiri / võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna 	Kuupäev	
Anton Pärn, juhatuse liige

	allkirjastatud digitaalselt	09.07.2026